하도급업무처리규정

제1장 총     칙

제1조【목  적】

이 규정은 당사가 집행하는 공사의 일부를 하도급하여 시공함에 있어 필요한 사항을 규정함        을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

회사가 집행하는 공사의 하도급 관련업무에 대하여는 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외하         고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조【용어의 정의】

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. □하수급인□이라 함은 회사가 집행하는 1건 공사의 일부분을 도급받았거나 받을 개인 또              는 법인을 말한다.

2. □사전공사□라 함은 정식계약 체결전에 착공이 불가피한 공사를 말한다.

제4조【업무관장】

하수급인의 선정 및 공사계약업무는 원칙적으로 본사에서 일괄하여 처리한다. 단, 다음 각           호의 사유로 사장이 인정하는 경우는 현장소장이 처리할 수 있다.

1. 예정가격 ○○ 만원 이하의 공사

2. 긴급을 요하는 공사로서 현장에서 처리하는 것이 유리한 경우

3. 기타 사장이 필요하다고 인정하는 경우

제5조【계약의 방법】

① 계약은 지명경쟁의 방법에 의한다.

② 전항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

1. 동일현장 내의 계속공사 또는 관련공사로서 회사의 예정 가격보다 낮게 견적 가격을 제             시한 전차시공자 또는 현시공자와 계약하는 경우

2. 수의계약에 의하는 것이 유리하거나 불가피하다고 인정될 경우

제2장 하수급인의 등록

제6조【자  격】

① 하수급인은 건설업법에 의한 전문공사면허를 받았거나 기타법률에 의한 자격을 보유한자           로서 회사에 등록된 자이어야 한다.

② 법률에 의하여 시공자격이 제한되지 않는 공종과 당해 시공면허업자가 없는 공종의 경우           에는 부가가치세법에 의하여 사업자등록이 되어 있는 자를 회사에 등록시킬 수 있다.

제7조【등록대장】

하수급업자 등록대장은 본사 공무부에서 관리하며 관련부서 및 현장에 통보한다.

제8조【등록시기 및 유효기간】

① 하수급인의 등록은 매년 1월에 1회 실시함을 원칙으로 한다.

② 등록의 유효기간은 차회등록 전일까지로 하며 1년 이내임을 원칙으로 한다.

제9조【등록추천】

당사에 시공실적이 없거나, 등록이 되어 있지 않은 업체가 등록하고자 할 때에는 당사 부서장  급 이상의 임직원 및 현장소장의 추천을 받아 등록원서를 제출하여야 한다.

제10조【적격심사】

① 접수된 등록원서는 공무부에서 취합하여 구비서류 검토 후 심사위원회에 회부하여 적격             심사한다.

② 심사위원회는 전무를 위원장으로 각 담당 임원 및 공무부서장으로 구성한다.

제11조【등록서류】

하수급인을 등록시킬 경우에는 다음 각호의 서류를 제출받아야 한다.

1. 등록원서

2. 면허증 또는 자격증(면허 또는 자격제한이 없는 공종은 제외)

3. 사업자등록증 사본

4. 법인등기부 등본(발행일로 부터 1개월 이내의 것)

5. 공사실적 내역표

6. 사용인감

7. 추천서

8. 기타 필요서류

제12조【절격사유】

다음 각호에 해당되는 자는 하수급인으로 등록시킬 수 없다.

1. 조잡한 시공 등으로 당사의 명예를 훼손하였거나 재산상 손해를 끼친 사실이 있는 자

2. 하자부수지시를 받고 이에 불은하였거나 태만히 한 자

3. 등록이 취소된 후 3년이 경과되지 아니한 자

4. 등록취소된 업체에 소속되어 회사에 출입하던자가 이적하여 다른 회사명의로 등록원서               를 제출한 경우

제13조【등록취소】

하수급인으로 등록된 자가 다음 각호에 해당될 경우에는 등록을 취소하고 지체없이 그 사           실을 해당자에게 통보하여야 한다.

1. 등록 서류를 허위로 작성한 경우

2. 입찰서 등록업체간에 담합하거나 기타 부정한 행위를 한 경우

3. 등록후 정당한 사유없이 계속하여 2회 이상 입찰에 불참한 경우

4. 제12조, 1, 2호에 해당할 경우

제3장 하수급인의 선정

제14조【하도급의뢰】

현장소장은 하도급하고자 하는 공사에 대한 공사설명서, 공사내용서, 대비표를 첨부하여 하          도급계약의뢰서를 작성 본사 공무부에 제출하여야 한다. 이때 현장소장은 적격하도업자를            2개 업체까지 추천할 수 있다.

제15조【지  명】

① 하수급인을 지명함에 있어서는 다음 각호의 기준에 의하여 적정히 검토하여야 한다.

1. 당해 공종의 시공실적

2. 기술능력 및 시공처리능력

3. 자산 및 신용상태와 당해 공사에 대한 투자노력

4. 장비 및 기자재 보유 상황

5. 지방여건의 적응성

② 당해 공종에 등록된 자를 대상으로 전항 각호의 지명기준에 의하여 3인 이상을 지명한               다. 지명된 자에게는 내역설명 및 견적제출일자를 즉시 통보하고 내역 설명을 청취하도록             하여야 한다.

제16조【견적개봉】

견적개봉은 공무부서장과 기술부서장이 입회한 자리에서 개봉하며 입회자 날인을 한다.

제17조【하수급인의 결정】

하수급인의 결정은 전조의 견적개봉결과 최저가격 제출자로 결정한다. 다만, 다음 각호의            경우에는 예외로 한다.

1. 견적내용을 검토하여 상이한 점이 발견되고 적정 여부를 검토할 필요가 있다고 인정될              경우에는 결정을 보류하고 검토 후 처리한다.

2. 최저가격으로 견적한 자의 내역단가가 현저하게 불합리하다고 인정될 경우에는 그 조정             을 요구할 수 있으며 이에 불응할 때에는 차순위자로 교체 결정한다.

3. 최저견적가격이 실행예산을 상회할 경우 그 사우가 타당성이 인정안될시 재견적에 붙이             거나 재지명할 수 있다.

4. 재견적에 붙인 경우에도 최저견적 가격이 실행예산을 초과할 경우에는 그 원인을 분석             하고 다른 방법으로 처리할 수 있다.

제18조【수의계약】

제5조 제2항의 수의계약을 할 경우에는 제14조, 제15조 제3항을 준용하되 합리적이고 적정    한 방법에 의한다.

제4장 계     약

제19조【계약서 작성】

① 하수급인이 결정된 경우에는 5일 이내에 건설공사 표준하도급계약서식에 의하여 계약서를            작성한다.

② 계약서작성에 있어서는 제반 기재사항이 누락되지 않도록 하여야 하며 공사의 성질 등을            감안하여 필요한 특수조건을 명기토록 한다.

제20조【계약보증금】

계약보증금은 계약금액(부가가치세액포함)의 100분의 10 이상으로 하며 계약이 종료되기      전에는 반환하지 아니한다.

제21조【하자보수 보증금】

하자보수 보증금은 계약금액의 100분의 3 이상으로 하되 원도급공사의 하자보수 보증금률에         미달되어서는 아니된다.

제22조【하자담보 책임기간】

하자담보 책임기간은 원도급공사의 하자담보 책임기간과 당해 하도급 공사 종료일로부터 원         도급공사 종료일까지의 기간을 합산하여 정한다.

제23조【보증금의 청구】

① 제보증금은 현금으로 청구함을 원칙으로 하되 보험회사의 보증보험증권 또는 전문건설공            제조합의 보증서로 갈음할 수 있다.

② 계약금액이 변경된 경우에는 이에 상응하도록 보증금을 조정, 청구하여야 한다.

제24조【보증인】

보증인은 1인 이상으로 하되 보증능력이 충분한 자로서 대체시공의 경우를 대비하여 가능한         한 회사에 등록된자 또는 그 기준 이상인자로 한다.

제25조【첨부서류의 확인】

계약서는 2통을 작성 인지세법의 규정에 의한 수입인지를 부착 교환하여야 하며 사업자 등          록의 변경 여부를 확인, 보완하여야 한다.

제26조【사전공사】

① 사전공사에 있어서도 하수급인의 결정은 이 규정에 따른다.

② 하수급인이 결정되면 착공 전에 단가계약을 체결한 후 집행한다.

③ 단가계약이 불가능한 경우에는 일괄계약을 체결하거나 회사의 실행예산 범위 내에서 집행            함에 하등의 이의가 없다는 내용의 각서를 제출받은 뒤 착수하도록 한다.

제5장 공사관리

제27조【시공감독】

현장소장은 공사 전반에 걸쳐 하수급인이 계약조건에 따라 시공하도록 감독, 검사 등의 제반         업무를 수행하여야 한다.

제28조【자재관리】

① 계약서사본이 현장에 접수되면 현장소장은 지급할 자재를 발췌관리하여야 한다.

② 하도급공사에 지급된 자재는 공사완료후 사용량을 확인하여 잔량을 전량회수하고 지급자            재정산서를 작성하여 최종공사 기성고조서 하도급공사정산서와 함께 관계부서에 송부한            다.

③ 하수급인의 지입자재가 현장에 반입되면 현장소장은 도면, 시방서 및 계약내역에 명시된            규격품인가를 확인하여 검수하고 합격품에 한하여 시공하도록 한다.

④ 하수급인에게 대하여 기계기구가 있을 경우 계약목적에 합당하게 사용하고 있는가를 감             독한다.

제29조【계약변경】

① 현장소장은 다음 각호의 계약내용을 변경하고자 할 때에는 하도급공사 정산승인신청서              에 의하여 본사에 계약변경을 의뢰하여야 한다.

1. 시공물량의 증감

2. 단가의 변경

3. 기타 여건변동으로 계약변동이 필요한 경우

② 공무부서장은 신청금액을 검토 최종결재를 받아 계약내역 변경합의서를 작성하고 현장에            통지한다.

제30조【계약의 해제】

① 현장소장은 하수급인이 다음 각호의 사유로 하도급계약을 해제 또는 해지할 필요가 있              다고 인정될 경우에는 본사에 이를 의뢰하여야 한다.

1. 정당한 이유없이 착공기일을 3일 이상 경과하여도 공사에 착수하지 아니할 때

2. 계약조건을 위반하여 준공기일 내에 공사를 완성할 수 없음이 명백한 때

② 전항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지할 경우에는 제20조의 계약보증금을 보증            금 계정에 대체하여 수입으로 계상한다.

제31조【선급금】

① 계약서에 의하여 소정의 품의를 받아 선급금을 지급할 때에는 먼저 다음 각호에 해당하           는 채권확보서류를 접수하여야 하며, 공사비 지급대장에 기록 관리하여야 한다.

1. 건설공제조합의 보증서

2. 보험회사의 보증보험증권

3. 은행의 지급보증서

4. 담보물건을 제공하고 근저당등기를 필한 등기부 등본

② 기성금을 지급할 때에는 기성률에 의하여 선급금을 정산하여야 한다.

제32조【기성금의 청구】

① 기성금은 월1회 정기적으로 청구함을 원칙으로 한다.

② 현장소장은 기성검사에 의하여 기성금액이 확정되면 공사기성고조서에 하수급인으로 부             터 세금계산서를 제출받아 하도급 기성내역서와 기성고 청구서를 첨부하고 기성금을 청             구한다.

제33조【기성금의 지급】

기성금을 지급할 때에는 하도급계약서와 대조하여 상이 여부를 확인하고 공사비 지급대장에         기록하여야 한다.

제34조【준공금의 청구】

① 준공검사결과 설계도대로 준공되었을 경우에는 이를 인수하고 제32조 제2항을 준용하

여 준공금을 청구한다.

② 전항의 준공금 청구시에는 현장소장은 공사기간 내 준공 여부를 확인하여 지체상금의 징수에 관한 자료를 제출하여야 한다.

제35조【준공금의 지급】

① 준공금을 지급할 때에는 하도급공사정산서와 대조하고 제33조의 규정을 준용하여 지급              하여야 한다.

② 준공의 지체로 지체상금을 징수할 경우에는 계약조건에 의하여 산출한 지체상금을 준공             금에서 공제한 후 지급해야 한다.

제36조【하자관리】

① 하도급공사가 완료되면 제21조 내지 23조의 규정에 의한 하자보수 보증금을 청구하여               계약서와 함께 관리한다.

② 하자가 발생된 경우에는 하수급인에게 즉시 보수지시를 하고 이에 불응할 때에는 보증서            발행기관에 통보하여 보험금을 확보하는 등 유효 적절한 조치를 즉시 취하여야 한다.

부     칙

1. 이 규정은 ○○년 ○월 ○일부터 시행한다.